Title: АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Author: User
Last saved by: Новоселова Наталья Геннадьевна
Company: АГНОиПНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2013  № 585-п

г. Новосибирск

О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области 
от 17.09.2012 № 427-п

Правительство Новосибирской области  п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 17.09.2012 № 427-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы» следующие изменения:
1. В долгосрочной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы» (далее – Программа):
1) в разделе «I. Паспорт Программы»: 
а) в строке «Исполнители основных мероприятий Программы» после слов «Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области» дополнить словами «; государственное казенное учреждение Новосибирской области «Служба 112»;
б) в строке «Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования и исполнителям мероприятий Программы)»:
цифры «653 648,0» заменить цифрами «650 338,0»;
цифры «444 380,0» заменить цифрами «441 070,0»;
2013 год:
цифры «206 476,0» заменить цифрами «205 966,0»;
цифры «510,0» заменить цифрой «0»;
2014 год:
цифры «326 222» заменить цифрами «326 732,0»;
цифры «510,0» заменить цифрами «1020,0»;
2015 год:
цифры «66 850,0» заменить цифрами «63 540,0»;
в) в строке «Важнейшие целевые индикаторы. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, выраженные в количественно измеримых показателях»:
слова «940 специалистов» заменить словами «743 специалиста»;
2) в абзаце тринадцатом раздела «II. Обоснование необходимости разработки Программы» слова «насчитывается 34 ЕДДС,» заменить словами «функционирует 35 ЕДДС,», слова «так как население города Искитима и Искитимского района обслуживает одна ЕДДС.» исключить;
3) в разделе «IV. Система мероприятий Программы»:
а) в абзаце одиннадцатом слова «2013-2015 годы» заменить словами «2013 год»;
б) абзац двенадцатый изложить в редакции «Этап 3. Развертывание и функциональное развитие «Системы 112» на всей территории Новосибирской области – 2013-2017 годы. С учетом опыта, полученного по итогам реализации этапа 2, в 2014 году планируется развертывание «Системы 112» на всей территории Новосибирской области.»;
в) в абзаце втором пункта 2 слово «бюджетного» заменить словом «казенного»;
4) в разделе «VI. Ресурсное обеспечение Программы»:
а) в абзаце втором пункта 2:
цифры «653 648,0» заменить цифрами «650 338,0»;
цифры «444 380,0» заменить цифрами «441 070,0»;
б) абзац девятнадцать исключить;
5) в разделе «VII. Ожидаемые результаты реализации Программы»:
а) в абзаце десятом цифры «940» заменить цифрами «743»;
б) в абзаце пятнадцатом слова «к 2017 году» заменить словами «в 2014 году»;
в) в абзаце шестнадцатом цифры «940» заменить цифрами «743»;
6) приложение № 1 к Программе «Цель, задачи и целевые индикаторы долгосрочной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
7) приложение № 2 к Программе «Мероприятия долгосрочной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
8) приложение № 3 к Программе «Сводные финансовые затраты долгосрочной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

Губернатор Новосибирской области                                                       В.А. Юрченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Новосибирской области
от 30.12.2013  № 585-п

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112»
на 2012-2017 годы»

Цель, задачи и целевые индикаторы 
долгосрочной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы»

Цель/задачи, требующие решения для достижения цели

Наименование
целевого индикатора

Ед. изме-рения

Значение весового коэффициента целевого индикатора

Значение целевого индикатора, 
в том числе по годам

Примечание

| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

Цель: улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб и повышение эффективности их реагирования на вызовы населения путем развертывания на территории Новосибирской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее – «Система 112»)

среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории Новосибирской области*

мин.

0,2

60

60

60

60

55

45

40

приводится среднее значение показателя по итогам реагирования на все типы вызовов;
до 2016 года оценивается на территории пилотного внедрения «Системы 112»

Задача 1. Проектирование «Системы 112» | готовность проектно-сметной документации на создание «Системы 112» на территории Новосибирской области | акт | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | документ, подтверждающий прохождение государственной экспертизы указанной проектной сметной документации
Задача 2. Обеспечение территориального развертывания и функционального развития «Системы 112» на территории Новосибирской области | количество единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, прошедших комплексную модернизацию в рамках Программы** | ед. | 0,35 | 0 | 0 | 22 | 35 | 35 | 35 | 35 | нарастающим итогом
| количество муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, дежурно-диспетчерские службы которых подключены к «Системе 112»*** | ед. | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 35 | нарастающим итогом
Задача 3. Организация обучения и повышения квалификации специалистов «Системы 112» | количество специалистов, прошедших обучение и подтвердивших соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к персоналу «Системы 112»**** | чел. | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 170 | 530 | 743 | нарастающим итогом
Задача 4. Информирование населения Новосибирской области о возможности вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | доля населения Новосибирской области, проинформированного о «Системе 112»***** | % | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 80 | 97 | 97 | нарастающим итогом

*Источник получения данных – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области (информация представляется по итогу отчетного года).
**Определяется исходя из данных, получаемых по итогам реализации соответствующих мероприятий Программы государственным заказчиком Программы.
***Определяется исходя из данных, получаемых по итогам реализации соответствующих мероприятий Программы государственным заказчиком Программы.
****Источник получения данных – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области (информация представляется ежеквартально).
*****Указывается исходя из данных средств массовой информации, реализующих мероприятия в рамках задачи 4 Программы, рассчитывающей охват целевой аудитории.

_________».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Новосибирской области
от 30.12.2013  № 585-п

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к долгосрочной целевой программе
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112»
на 2012-2017 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
долгосрочной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы»

Наименование мероприятия

Наименование показателя

Единица
измере-ния

Значение показателя, в том числе по годам

Ответствен-ный 
исполнитель

Ожидаемый результат

| | | 2012 | 2013 | 2014* | 2015* | 2016* | 2017* | итого* | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Цель: улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб и повышение эффективности их реагирования на вызовы, поступающие от населения, путем развертывания на территории Новосибирской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее – «Система 112»)
Задача 1. Проектирование «Системы 112»

1.1. Проведение предпроектного обследования текущего состояния инфраструктуры ЕДДС и ДДС муниципальных образований Новосибирской области, подготовка технических требований к архитектуре и системному проекту «Системы 112», разработка и согласование с МЧС России технического задания на разработку проектной документации и сметного расчета

Количество отчетов

ед.

1

-

-

-

-

-

1

ДИиРТТ
НСО

Техническое задание, согласованное в МЧС России, на разработку проектной документации и сметного расчета на создание «Системы 112» на территории НСО, включая требования к проектным решениям, структуре «Системы 112», регламентам межведомственного взаимодействия, составу и функциональности программно-аппаратных комплексов основных подсистем «Системы 112», требования к порядку согласования проекта

| Стоимость единицы | тыс. руб. | 85,0 | - | - | - | - | - | 85,0 | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 85,0 | - | - | - | - | - | 85,0 | |
| федеральный бюджет*** | тыс. руб. | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| областной бюджет | тыс. руб. | 85,0 | - | - | - | - | - | 85,0 | |
| местные бюджеты | тыс. руб. | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |

1.2. Разработка и утверждение в МЧС России проектной документации и сметного расчета на создание «Системы 112» на территории Новосибирской области. Прохождение государственной экспертизы проектной документации и сметного расчета

Комплект документации

ед.

1

-

-

-

-

-

1

ДИиРТТ
НСО

Комплект проектной документации и сметного расчета. Акт о прохождении государственной экспертизы

| Стоимость единицы | тыс. руб. | 7915,0 | - | - | - | - | - | 7915,0 | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 7915,0 | - | - | - | - | - | 7915,0 | |
| федеральный бюджет*** | тыс. руб. | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| областной бюджет | тыс. руб. | 7915,0 | - | - | - | - | - | 7915,0 | |
| местные бюджеты | тыс. руб. | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |

1.3. Разработка механизмов координации управления в сфере реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения при происшествиях и чрезвычайных ситуациях. Разработка и принятие организационно-распорядительных документов и регламентов межведомственного взаимодействия

Комплект документации

ед.

-

-

1

-

-

-

1

ДИиРТТ 
НСО, 
ГКУ НСО «Служба 112»,
МЧС России, МВД, Минздрав
НСО

Действующие механизмы координации управления при чрезвычайных ситуациях, комплексных ситуациях (регламенты), утвержденная нормативная правовая документация

| Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | 99,5 | - | - | - | 99,5 | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | 99,5 | - | - | - | 99,5 | |
| федеральный бюджет*** | тыс. руб. | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
| областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 99,5 | - | - | - | 99,5 | |
| местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |

1.4. Разработка программы и методики испытаний «Системы 112» в Новосибирской области, инструкций по эксплуатации «Системы 112» и методики оценки эффективности ее функционирования

Комплект документации

ед.

-

-

1

-

-

-

1

ДИиРТТ
НСО,
ГКУ НСО «Служба 112»

Разработанные инструкции по эксплуатации, методические рекомендации

| Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | 300,0 | - | - | - | 300,0 | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | 300,0 | - | - | - | 300,0 | |
| федеральный бюджет*** | тыс. руб. | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
| областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 300,0 | - | - | - | 300,0 | |
| местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |

Итого затрат на решение задачи 1,
в том числе:

тыс. руб.

8000,0

0

399,5

0

0

0

8399,5

x

x

федеральный бюджет*** | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x
областной бюджет | тыс. руб. | 8000,0 | 0 | 399,5 | 0 | 0 | 0 | 8399,5 | x | x
местные бюджеты | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x
внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x
Задача 2. Обеспечение территориального развертывания и функционального развития «Системы 112» на территории Новосибирской области

2.1. Создание государственного казенного учреждения, осуществляющего эксплуатацию и сопровождение «Системы 112» ГКУ НСО «Служба 112» и обеспечение его функционирования

Количество учреждений

ед.

-

1

1

1

1

1

1

ДИиРТТ
НСО,
ГКУ НСО «Служба 112»

ГКУ НСО «Служба 112», обеспечивающее бесперебойное функционирование «Системы 112»

| Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 652,2 | 8874,5 | 8874,5 | 8874,5 | 8874,5 | 36150,2 | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | 652,2 | 8874,5 | 8874,5 | 8874,5 | 8874,5 | 36150,2 | |
| федеральный бюджет*** | тыс. руб. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | тыс. руб. | - | 652,2 | 8874,5 | 8874,5 | 8874,5 | 8874,5 | 36150,2 | |
| местные бюджеты | тыс. руб. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

2.2.  Реконструкция здания в г. Новосибирске по ул. Свердлова,14 для размещения центра обработки вызовов 112

Количество сооружений

ед.

-

-

1

-

-

-

1

МСиЖКХ НСО

2013 год – разработанные и утвержденные: проектная документация, сметный расчет на ЦОВ и Ситуационный центр «Системы 112». 
Поэтапная реконструкция здания: 
2013 год – реконструкция здания, площадью до 1000 кв.м с помещениями, оборудованными телекоммуникационным, компьютерным и специализированным оборудованием, обеспечивающим функционирование ЦОВ «Системы 112» в круглосуточном режиме,
2014 год – продолжение реконструкции здания, площадью до 2000 кв.м с помещениями, оборудованными телекоммуникационным, компьютерным и специализированным оборудованием, обеспечивающим функционирование Ситуационного центра «Системы 112» в круглосуточном режиме.
Акт о завершении реконструкции здания

| Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 185076,0 | 160000,0 | - | - | - | 345076,0 | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | 185076,0 | 160000,0 | - | - | - | 345076,0 | |
| федеральный бюджет*** | тыс. руб. | - | 138076,0 | 0 | - | - | - | 138076,0 | |
| областной бюджет | тыс. руб. | - | 47000,0 | 160000,0 | - | - | - | 207000,0 | |
| местные бюджеты | тыс. руб. | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |

2.3. Реконструкция помещений по адресу: г. Новосибирск, ул. Николаева,11 и ул. Николаева,12 для размещения резервного центра обработки вызовов «Системы 112»

Количество сооружений

ед.

-

-

1

-

-

-

1

МСиЖКХ НСО

2013 год – разработанные и утвержденные: проектная документация, сметный расчет. 2014 год – помещения РЦОВ площадью до 1000 кв.м, оборудованные телекоммуникационным, компьютерным и специализированным оборудованием, обеспечивающим функционирование РЦОВ в круглосуточном режиме.
Акт приемки готового к эксплуатации РЦОВ

| Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 5000,0 | 102172,0 | - | - | - | 107172,0 | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | 5000,0 | 102172,0 | - | - | - | 107172,0 | |
| федеральный бюджет*** | тыс. руб. | - | 0 | 70172,0 | - | - | - | 70172,0 | |
| областной бюджет | тыс. руб. | - | 5000,0 | 32000,0 | - | - | - | 37000,0 | |
| местные бюджеты | тыс. руб. | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |

2.4. Ремонт (реконструкция) помещений ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области

Количество ЕДДС

ед.

-

-

34^1

-

-

-

34^1

ДИиРТТ
НСО,
ГКУ НСО «Служба 112», ОМС

Подготовленные к работе помещения ЕДДС

| Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | 300,0 | - | - | - | 300,0 | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | 10200,0 | - | - | - | 10200,0 | |
| федеральный бюджет*** | тыс. руб. | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
| областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 9180,0 | - | - | - | 9180,0 | |
| местные бюджеты**** | тыс. руб. | - | - | 1020,0 | - | - | - | 1020,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |

2.5. Организация высокоскоростного телекоммуникационного обмена между ЕДДС и ДДС

Протяженность линий связи

км

-

-

41

-

-

-

41

ДИиРТТ
НСО,
ГКУ НСО «Служба 112»

Соединение оптоволоконной связью ЕДДС и 20 ДДС пожарных частей

| Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | 500,0 | - | - | - | 500,0 | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | 20500,0 | - | - | - | 20500,0 | |
| федеральный бюджет*** | тыс. руб. | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
| областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 20500,0 | - | - | - | 20500,0 | |
| местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |

2.6. Оснащение ЕДДС программно-техническими комплексами

Количество ЕДДС

ед.

-

22

13

35

-

-

35

ДИиРТТ
НСО,
ГКУ НСО «Служба 112»

100% оснащение 35 ЕДДС современными автоматизированными системами обмена информацией в рамках «Системы 112»

| Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 670-1375 | 670-1375 | 670-1375 | - | - | 670-1375 | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | 15237,8 | 17886,0 | 23475,5 | - | - | 56599,3 | |
| федеральный бюджет*** | тыс. руб. | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| областной бюджет | тыс. руб. | - | 15237,8 | 17886,0 | 23475,5 | - | - | 56599,3 | |
| местные бюджеты | тыс. руб. | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |

2.7. Интеграция «Системы 112» с системой ЭРА‑ГЛОНАСС**

Количество систем

ед.

-

-

-

-

1

-

1

ДИиРТТ 
НСО,
ГКУ НСО «Служба 112»

Обеспечение совместимости «Системы 112» с системой 
ЭРА-ГЛОНАСС. 
Расширение функциональных возможностей «Системы 112» при обработке данных о ДТП

| Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | 9925,5 | 35,5 | 9961,0 | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | 9925,5 | 35,5 | 9961,0 | |
| федеральный бюджет*** | тыс. руб. | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | 9925,5 | 35,5 | 9961,0 | |
| местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |

2.8. Создание подсистемы обеспечения информационной безопасности. Аттестация объектов «Системы 112» по требованиям обеспечения безопасности информации

Количество рабочих мест

ед.

-

-

50

50

-

-

100

ДИиРТТ
НСО,
ГКУ НСО «Служба 112»

Аттестат соответствия информационной безопасности и соответствия требованиям по работе с персональными данными

| Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | 88,0 | 88,0 | - | - | 88,0 | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | 4400,0 | 4400,0 | - | - | 8800,0 | |
| федеральный бюджет*** | тыс. руб. | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 4400,0 | 4400,0 | - | - | 8800,0 | |
| местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |

2.9. Внедрение в опытную эксплуатацию «Системы 112», доработка регламентов межведомственного взаимодействия, определение необходимых дополнений и изменений в действующие нормативные правовые акты Новосибирской области**

Количество систем

ед.

-

-

-

1

-

-

1

ДИиРТТ 
НСО,
ГКУ НСО «Служба 112»

Акт опытной эксплуатации готовой «Системы 112». По результатам испытаний осуществляется корректировка документации и исправление недостатков

| Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | 2000,0 | - | - | 2000,0 | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | 2000,0 | - | - | 2000,0 | |
| федеральный бюджет*** | тыс. руб. | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
| областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | 2000,0 | - | - | 2000,0 | |
| местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |

2.10. Прохождение государственных испытаний и принятие «Системы 112» в Новосибирской области в эксплуатацию**

Количество документов

ед.

-

-

-

1

-

-

1

ДИиРТТ
НСО,
ГКУ НСО «Служба 112», 
ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ», Минздрав НСО, 
МВД, 
МЧС
России

Акт приема в эксплуатацию

| Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | 1190,0 | - | - | 1190,0 | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | 1190,0 | - | - | 1190,0 | |
| федеральный бюджет*** | тыс. руб. | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
| областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | 1190,0 | - | - | 1190,0 | |
| местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |

Итого затрат на решение задачи 2,
в том числе:

тыс. руб.

0

205966,0

324236,5

39940,0

18800,0

8910,0

5978522,5

x

x

федеральный бюджет*** | тыс. руб. | 0 | 138076,0 | 70172,0 | 0 | 0 | 0 | 208248,0 | x | x
областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 67890,0 | 253044,5 | 39940,0 | 18800,0 | 8910,0 | 388584,5 | x | x
местные бюджеты**** | тыс. руб. | 0 | 0 | 1020,0 | 0 | 0 | 0 | 1020,0 | x | x
внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x
Задача 3. Организация обучения и повышения квалификации специалистов «Системы 112»

3.1. Создание учебно- тренировочного комплекса для подготовки персонала и операторов «Системы 112», включая систему дистанционного обучения

Количество центров

ед.

-

-

-

1

-

-

1

ДИиРТТ
НСО, 
ГКУ НСО «Служба 112»

Разработка и создание учебно-тренировочного комплекса для специалистов ЦОВ, ЕДДС, ДДС

| Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | 20000,0 | - | - | 20000,0 | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | 20000,0 | - | - | 20000,0 | |
| федеральный бюджет*** | тыс. руб. | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
| областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | 20000,0 | - | - | 20000,0 | |
| местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |

3.2. Обучение персонала «Системы 112»

Количество специалистов

чел.

-

-

70

100

360

213

743

ДИиРТТ
НСО,
ГКУ НСО «Служба 112»

Специалисты с уровнем подготовки, необходимым для работы в «Системе 112»

| Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | 2100,0 | 3000,0 | 10800,0 | 6390,0 | 22290,0 | |
| федеральный бюджет*** | тыс. руб. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 2100,0 | 3000,0 | 10800,0 | 6390,0 | 22290,0 | |
| местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Итого затрат на решение задачи 3,
в том числе:

тыс. руб.

0

0

2100,0

23000,0

10800,0

6390,0

42290,0

x

x

федеральный бюджет*** | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x
областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 2100,0 | 23000,0 | 10800,0 | 6390,0 | 42290,0 | x | x
местные бюджеты | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x
внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x
Задача 4. Информирование населения Новосибирской области о возможности вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

4.1. Подготовка и размещение в СМИ информации о функционировании «Системы 112»

Количество публикаций*

ед.

-

-

2

12

12

12

38

ДИиРТТ
НСО,
ГКУ НСО «Служба 112»

Повышение уровня информированности населения Новосибирской области о возможности вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

| Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | 100,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1900,0 | |
| федеральный бюджет*** | тыс. руб. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 100,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1900,0 | |
| местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Итого затрат на решение задачи 4,
в том числе:

тыс. руб.

0

0

100,0

600,0

600,0

600,0

1900,0

x

x

федеральный бюджет*** | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x
областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 100,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1900,0 | x | x
местные бюджеты | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x
внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x

Итого затрат на достижение цели, 
в том числе:

тыс. руб.

8000,0

205966,0

326732,0

63540,0

30200,0

15900,0

650338,0

x

x

федеральный бюджет*** | тыс. руб. | 0 | 138076,0 | 70172,0 | 0 | 0 | 0 | 208248,0 | x | x
областной бюджет | тыс. руб. | 8000,0 | 67890,0 | 255540,0 | 63540,0 | 30200,0 | 15900,0 | 441070,0 | x | x
местные бюджеты**** | тыс. руб. | 0 | 0 | 1020,0 | 0 | 0 | 0 | 1020,0 | x | x
внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x

*Прогнозные значения, подлежащие корректировке после завершения проектных работ.
**Перечень конкретных работ будет определен в рамках подготовки соответствующего технического задания.
***Приведена прогнозная оценка на условиях софинансирования за счет субсидий федерального бюджета.
****Приведена прогнозная оценка. Объемы финансирования ежегодно уточняются после принятия решения о бюджетах представительными органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области.
^1 – перечень муниципальных образований, на территории которых осуществляются мероприятия Программы в части ремонта (реконструкции) и оснащения ЕДДС муниципальных образований в текущем году, устанавливается и утверждается нормативным правовым актом государственного заказчика – координатора Программы не позднее третьего квартала текущего года, а также корректируется в соответствии с потребностью развития «Системы – 112» в плановом периоде. Указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней после утверждения размещается на официальном сайте государственного заказчика – координатора Программы в сети Интернет.

Применяемые сокращения:
ГКУ НСО «Служба 112» – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Служба 112»;
ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области»;
ДДС – дежурно-диспетчерская служба;
ДИиРТТ НСО – департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области;
ДТП – дорожно-транспортное происшествие;
ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба;
МВД – Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области;
Минздрав НСО – министерство здравоохранения Новосибирской области;
МО – муниципальные образования Новосибирской области;
МСиЖКХ НСО – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области;
МЧС России – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области;
ОМС – органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области;
Областной бюджет – областной бюджет Новосибирской области;
РЦОВ – резервный центр обработки вызовов;
СМИ – средства массовой информации;
ЦОВ – центр обработки вызовов;
ЭРА-ГЛОНАСС – система экстренного реагирования при авариях.

_________».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 30.12.2013  № 585-п

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к долгосрочной целевой программе
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112»
на 2012-2017 годы»

Сводные финансовые затраты 
долгосрочной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы»

Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков Программы (главных распорядителей бюджетных средств) | Финансовые затраты, тыс. рублей (в ценах 2012 г.) | Примечание
| всего | в том числе по годам |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области
Всего финансовых затрат, в том числе из: | 198 090,0 | 8 000,0 | 15 890,0 | 64 560,0 | 63 540,0 | 30 200,0 | 15 900,0 |
федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областного бюджета | 197 070,0 | 8 000,0 | 15 890,0 | 63 540,0 | 63 540,0 | 30 200,0 | 15 900,0 |
местных бюджетов | 1 020,0 | 0 | 0 | 1020,0 | 0 | 0 | 0 |
внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капитальные вложения, в том числе из: | 45 500,0 | 0 | 10 500,0 | 15 000,0 | 20 000,0 | 0 | 0 |
федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областного бюджета | 45 500,0 | 0 | 10 500,0 | 15 000,0 | 20 000,0 | 0 | 0 |
местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НИОКР*, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие расходы, в том числе из: | 155 900,0 | 8 000,0 | 5 390,0 | 49 050,0 | 43 540,0 | 30 200,0 | 15 900,0 |
федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областного бюджета | 154 880,0 | 8 000,0 | 5 390,0 | 48 540,0 | 43 540,0 | 30 200,0 | 15 900,0 |
местных бюджетов | 1 020,0 | 0 | 0 | 510,0 | 0 | 0 | 0 |
внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Министерство строительство и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области
Всего финансовых затрат, в том числе из: | 452 248,0 | 0 | 190 076,0 | 262 172,0 | 0 | 0 | 0 |
федерального бюджета | 208 248,0 | 0 | 138 076,0 | 70 172,0 | 0 | 0 | 0 |
областного бюджета | 244 000,0 | 0 | 52 000,0 | 192 000,0 | 0 | 0 | 0 |
местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капитальные вложения, в том числе из: | 452 248,0 | 0 | 190 076,0 | 262 172,0 | 0 | 0 | 0 |
федерального бюджета | 208 248,0 | 0 | 138 076,0 | 70 172,0 | 0 | 0 | 0 |
областного бюджета | 244 000,0 | 0 | 52 000,0 | 192 000,0 | 0 | 0 | 0 |
местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НИОКР*, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие расходы, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
Всего финансовых затрат, в том числе из: | 650 338,0 | 8 000,0 | 205 966,0 | 326 222,0 | 63 540,0 | 30 200,0 | 15 900,0 |
федерального бюджета | 208 248,0 | 0 | 138 076,0 | 70 172,0 | 0 | 0 | 0 |
областного бюджета | 441 070,0 | 8 000,0 | 67 890,0 | 255 540,0 | 63 540,0 | 30 200,0 | 15 900,0 |
местных бюджетов | 1 020,0 | 0 | 0 | 510,0 | 0 | 0 | 0 |
внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капитальные вложения, в том числе из: | 497 748,0 | 0 | 200 576,0 | 277 172,0 | 20 000,0 | 0 | 0 |
федерального бюджета | 208 248,0 | 0 | 138 076,0 | 70 172,0 | 0 | 0 | 0 |
областного бюджета | 289 500,0 | 0 | 62 500,0 | 207 000,0 | 20 000,0 | 0 | 0 |
местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НИОКР*, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие расходы, в том числе из: | 155 900,0 | 8 000,0 | 5 390,0 | 49 050,0 | 43 540,0 | 30 200,0 | 15 900,0 |
федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областного бюджета | 154 880,0 | 8 000,0 | 5 390,0 | 48 540,0 | 43 540,0 | 30 200,0 | 15 900,0 |
местных бюджетов | 1 020,0 | 0 | 0 | 510,0 | 0 | 0 | 0 |
внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Применяемое сокращение:
Областной бюджет – областной бюджет Новосибирской области.

Продолжение приложения № 3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
долгосрочной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы» в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов областного бюджета

тыс. рублей
№ п/п | Наименование расходного обязательства | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | КВР | Период реализации Программы
| | | | | | | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год
1 | Долгосрочная целевая программа «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы», в том числе: | 194 | 04 | 10 | 522 64 00 | | 8 000,0 | 15 890,0 | 63 540,0 | 63 540,0 | 30 200,0 | 15 900,0
| | 124 | 04 | 10 | 522 64 00 | | 0 | 52 000,0 | 192 000,0 | 0 | 0 | 0
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 194 | 04 | 10 | 522 64 00 | 200 | 8 000,0 | 15 890,0 | 63 540,0 | 63 540,0 | 30 200,0 | 15 900,0
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 194 | 04 | 10 | 522 64 00 | 240 | 8 000,0 | 15 890,0 | 63 540,0 | 63 540,0 | 30 200,0 | 15 900,0
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 194 | 04 | 10 | 522 64 00 | 242 | 8 000,0 | 15 890,0 | 63 540,0 | 63 540,0 | 30 200,0 | 15 900,0
| Бюджетные инвестиции | 124 | 04 | 10 | 522 64 00 | 400 | 0 | 52 000,0 | 192 000,0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) учреждениям | 124 | 04 | 10 | 522 64 00 | 410 | 0 | 52 000,0 | 192 000,0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 124 | 04 | 10 | 522 64 00 | 411 | 0 | 52 000,0 | 192 000,0 | 0 | 0 | 0
| Итого | | | | | | 8 000,0 | 67 890,0 | 255 540,0 | 63 540,0 | 30 200,0 | 15 900,0
_________».